입  찰  공  고

『2005 대구국제섬유박람회(PREVIEW IN DAEGU)』트랜드 포럼관 장치공사 업체선정을 위하여 다음과 같이 공고함

1. 입찰건명 : 『2005 대구국제섬유박람회 트랜드 포럼관』전시장치공사

2. 공사범위 : 전시관 내 트랜드포럼관 장치공사 및 철거

15×18=270㎡ (30부스) 정도

3. 공사기간 : 계약체결일로부터 2005. 3. 19(토) 까지

4. 입찰일정

일 정	일 시	장 소
입찰공고	2005. 2. 14(월) 14:00	홈페이지 공고, 업체 공문발송
공사설명회	2005. 2. 24(목) 14:00	섬유개발연구원 3층 대회의실
입찰등록마감	2005. 2. 28(월) 14:00	섬유개발연구원 3층 소회의실
입찰	2005. 2. 28(월) 15:00	섬유개발연구원 3층 소회의실

5. 입찰참가자격 :  가) 및 나)항 요건충족 업체

가) 대구전시컨벤션센터 전시장치 등록업체

나) ’02년이후 단일 전시장치공사실적이 3,000만원(VAT 포함) 이상인 업체

6. 입찰방법 및 낙찰자 결정

- 예정가격 이하의 총액최저가 제시업체를 낙찰자로 결정

- 1차입찰에서 3차투찰하여 낙찰자가 없을 경우 최저가 제시업체 순으로 예정가격 범위내에서 수의시담

7. 입찰등록서류

가) 입찰참가신청서(당사소정양식) 1부.

나) 사업자등록증 사본 및 공사업면허증 사본(원본제시) 각 1부.

다) 인감증명서 및 사용인감계 각1부.

라) 상기 5항의 실적을 증명하는 실적증명서 및 계약서 사본 1부.

8. 입찰보증금 : 입찰서류 등록시 입찰금액의 10/100 이상의 현금 또는 당사를 피보험                  자로 하는 보증금액 이상의 보증보험증권

9. 기타사항

가) 입찰과 관련한 일정 및 장소는 협회의 사정에 의하여 변경될 수 있음

나) 상기의 자세한 사항은 대구국제섬유박람회 사무국 컨설팅팀으로 문의하시기 바람

- TEL : 053-560-6540 FAX : 053-560-6525 E-MAIL : rh0405@previewin.com

- 담당자 : 컨설팅팀 류 현

2005.  2.

(사)대구경북섬유산업협회 회장

2005 PID 트렌드포럼관 장치공사 설명회 참가 신청서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 2005 PID 트렌드포럼관 장치공사

나. 내    용 : 전시관 내 트렌드포럼관 장치공사 및 철거

나. 위    치 : 대구국제전시컨벤션센터내 전시장

다. 면    적 : 15×18=270㎡ (30부스) 정도

라. 공사기간 : 계약일로부터 2005.3.19까지

2. 입찰 일정

구분	일시	장소
입찰공고	2005. 2. 15(화) 14:00	홈페이지공고, 업체 공문발송
공사설명회	2005. 2. 24(목) 14:00	한국섬유개발연구원 3층 대회의실
입찰등록마감	2005. 2. 28(월) 14:00	한국섬유개발연구원 3층 소회의실
입찰	2005. 2. 28(월) 15:00	한국섬유개발연구원 3층 소회의실

3. 참가자격 : EXCO 전시장치 등록업체

※ 문의처

PID사무국 컨설팅팀 / 류현 (Tel. 053-560-6540 Fax. 053-560-6525)

========================================================

업체명
주소
부서명
담당자
전화번호

대 국 국 제 섬 유 박 람 회 사 무 국

입 찰 자  유 의 서

본 유의서는『2005 대구국제섬유박람회(PREVIEW IN DAEGU) 트랜드포럼관』장치공사 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 규정하는데 목적을 둔다.

제 1 장 입찰 유의사항

제 1 조 (입찰대상 및 입찰가격조건)

1. 입찰대상은 입찰유의서 등 관련서류에 의한다.

2. 입찰가격은 입찰대상물을 설치하고 전시회가 종료된 후 공사설치물을 낙찰자가 회수하는 비용까지 포함한다.

3. 계약기간은 계약 체결일로부터 철거완료일(2005년 3월 19일)까지로 한다.

제 2 조 (입찰참가규정)

1. 입찰에 참가할 수 있는 자는 입찰등록을 필한 업체에 한한다.

2. 입찰등록시 위임장을 제출한 경우에는 그 대리인도 참가할 수 있다.

3. 입찰에 사용하는 인감은 입찰등록시에 날인한 인감으로 한다.

제 3 조 (입찰등록서류)

입찰에 참가하고자 하는 자는 다음 각 호의 서류를 2005. 2. 28(월) 14:00까지 PID사무국 입찰주관부서(컨설팅팀)로 제출한다.

1. 입찰참가신청서(당사소정양식) 1부.

2. 법인등기부등본 및 위임장(당사소정양식) 1부.

3. 대표자 인감증명서 및 사용인감계 각 1부.

4. 모든 서류의 용도 및 사용목적은 ‘입찰등록용’으로 기재하고 제출처는            ‘(사)대구경북섬유산업협회’로 기재하여야 한다

제 4 조 (입찰보증금)

입찰자는 입찰등록시 입찰금액의 10/100 이상에 해당하는 입찰보증금(관련제세포함)을 현금 또는 시중은행 발행 자기앞수표로 납부하여야 한다. 다만, 다음 각호의 보증서 또는 증권으로 대체 납부할 수 있다.

1. 은행의 지급보증서

2. 보험회사가 발행하는 입찰이행보증보험증권

3. 건설공제조합이 발행하는 보증서

제 5 조 (입찰보증금의 처리)

1. 입찰보증금은 입찰절차 종료후 입찰자의 청구에 의하여 반환한다. 단,  제4조 단서조항의 보증서는 반환하지 아니한다.

2. 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결시까지 반환하지 아니하며, 낙찰자가  소정의 기한내에 정당한 사유없이 계약을 체결하지 아니할 때 당해 보증금은 (사)대구경북섬유산업협회에 귀속한다.

제 6 조 (입찰방법 및 낙찰자 결정)

1. 예정가격 이하로 입찰한 자중 최저입찰가격으로 입찰한 자를 낙찰자로  결정한다.

2. 낙찰금액이 동일할 경우에는 즉시 추첨으로 순위를 결정한다.

3. 1차 입찰에서 3회 투찰하여 낙찰자가 없을 경우 재공고없이 최저가 제시순으로 수의시담한다.

제 7 조 (입찰서의 작성)

1. 입찰서는 (사)대구경북섬유산업협회의 소정양식에 의거 작성하여야 하며 입찰서상의 입찰금액은 제1조의 입찰대상에 대한 가격으로 제세금을 포함한 총액으로 표기한다.

2. 입찰서의 기재사항중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용  하는 인감을 사용하여야 한다.

3. 입찰서의 금액표시는 한글 또는 한자로 기재하고 괄호안에 아라비아 숫자로 부기하여야 한다. 다만, 한글 또는 한자로 기재된 금액과 아라비아 숫자로 기재된 금액이 서로 상이할 경우에는 한글 또는 한자로 기재된 금액에 의한다.

제 8 조 (입찰서의 제출)

1. 입찰서는 1인 1통만을 제출하며 (사)대구경북섬유산업협회의 소정양식에 의한다.

2. 입찰서는 봉합하여 제출하여야 하며 봉합된 봉투 뒷면에 입찰자 상호를  기입하여 상, 중, 하 3개소에 날인한다.

3. 입찰서가 제출된 이후에는 교환, 변경 또는 취소하지 못한다.

제 9 조 (입찰의 성립)

입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로서 성립한다.

제 10 조 (입찰 및 투찰의 무효)

1. 입찰의 무효

가. 입찰 참가자격이 없는 자가 한 입찰

나. 대리권이 없는 자가 한 입찰

다. 소정시일까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 행한 입찰

라. 입찰서가 소정의 일시까지 소정장소에 도착하지 아니한 입찰

마. 동일사항에 대하여 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

바. 담합하거나 타인의 경쟁참가 또는 관계자의 업무집행을 방해한 자의 입찰

사. 소정의 등록절차를 필하지 아니한 자가 제출한 입찰

2. 투찰의 무효

가. 입찰서의 입찰금액 등 중요한 부분이 불분명하거나 정정한 후 정정  날인을 누락한 경우

나. 입찰서의 인감이 다른 경우 혹은 기명날인이 누락된 경우

제 11 조 (부당업자에 대한 입찰참가 자격제한)

다음 각호에 해당하는 자는 1년간 입찰참가를 제한한다.

1. 계약의 이행에 있어서 고의로 조작 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자

2. 고의로 무효입찰을 한 자

3. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하거나 미리 입찰가격을 협정하여 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자

4. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

5. 입찰참가신청서를 제출하고 계속하여 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자

6. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무수행을 방해한 자

7. 정당한 이유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

8. 입찰에 참가하기 위하여 제출한 서류, 기타 계약에 관한 서류를 위조하거나 변조한 자

9. (사)대구경북섬유산업협회의 승인없이 하도급을 시키거나 승인을 받은 하도급 조건을 변경한 자

10. 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자

제 12 조 (입찰사항의 변경 등)

(사)대구경북섬유산업협회는 필요한 경우 입찰에 관한 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 변경사항을 입찰 전에 입찰참가자에게 통지한다.

제2장 계약 일반사항

제 13 조 (계약의 체결)

1. 낙찰자는 낙찰일로부터 5일 이내에 계약을 체결한다

2. 낙찰자가 정당한 사유없이 제1항의 소정기일내에 계약을 체결하지 아니

한 때에는 낙찰을 취소할 수 있으며, 입찰보증금은 당사에 귀속한다. 단,

(사)대구경북섬유산업협회의 부득이한 사정에 의한 경우에는 예외로 한다

제 14 조 (계약보증금)

1. 계약보증금은 계약금액의 10/100 이상으로 하는 현금(금융기관 발행 자

기앞수표 포함) 또는 제4조 제 1, 2, 3항의 방법으로 납부하여야 한다

2. 낙찰자가 납부한 입찰보증금은 소정의 절차에 따라 계약보증금으로 대체할 수 있다. 다만, 입찰보증금과 계약보증금과의 차이가 있을 경우에는 그 차액을 제4조의 방법으로 추가 납부한다

제 15 조 (차액보증금)

1. 낙찰자가 예정가격의 88％이하의 금액으로 낙찰된 때에는 예정가격과 낙찰금액과의 차액을 차액보증금으로 납부하여야 한다

2. 차액보증금의 납부에 관하여는 제4조의 규정을 준용한다

제 16 조 (계약보증금과 차액보증금의 처리)

1. 계약보증금 및 차액보증금은 계약이 이행된 후 계약자의 청구에 의해 반환한다.

2. 단, 낙찰자가 계약을 이행하지 않을 경우 동 보증금은 (사)대구경북섬유산업협회에 귀속한다.

제 17 조 (내역서 제출)

1. 낙찰자는 낙찰후 3일 이내에 계약금액에 관한 세부내역을 명시한 내역서를 제출한다.

2. (사)대구경북섬유산업협회는 계약 체결시에 제출된 내역서에 대하여 이의가 있을 경우 재작성을 요구할 수 있다.

제 18 조 (연대보증인)

1. 낙찰자는 계약체결시에 1인 이상의 연대보증인을 두어야 하며, 연대보증인은 계약자의 계약 이행에 대하여 계약자와 연대하여 책임을 진다.

2. 단 1항에도 불구하고 계약금액의 20/100 이상의 현금(금융기관 발행 자기앞수표 포함) 또는 보험회사가 발행하는 계약이행 보증보험증권을 납부시에는 연대보증인을 세우지 아니할 수도 있다.

제 19 조 (검사 및 검수)

1. 계약자는 전시장치 완료 후 이를 증빙할 수 있는 서류를 (사)대구경북섬유산업협회에 제출하여 1차 검사 및 검수를 한다.

2. 계약자는 전시장치 철거 후 2차 검사 및 검수를 한다.

3. 단, (사)대구경북섬유산업협회가 필요하다고 인정하는 경우 작업도중 중간검수를 할 수 있으며, 부실작업으로 지적될 경우 계약자는 즉시 재작업을 실시하여야 한다.

제 20 조 (대금지급)

(사)대구경북섬유산업협회의 검사 및 검수에 합격한 후 계약자의 청구에 의해 청구일로부터 14일 이내 현금으로 지급한다.

제 21 조 (지체상금)

1. 계약자는 계약기한 내 계약내용을 완료하지 아니한 때에는 계약기간 익일 부터 매 지체당 계약금액(부가세별도)의 2.5/1,000에 해당하는 지체상금을 현금으로 납부해야 한다.

2. 제1항의 사유가 천재지변 등 불가항력적인 경우 또는 (사)대구경북섬유산업협회의 사정 등 계약자의 책임에 속하지 않는 사유에 의하여 발생할 경우에는 당해기간의 지체상금은 면제된다.

3. (사)대구경북섬유산업협회의 제1항의 규정에 의한 지체상금을 계약자에게  지급하여야 할 대금 또는 기타 예치금에서 공제할 수 있다.

제 22 조 (정산)

장치공사대금은 시방서에 표기된 사양과 수량으로 기준 하되 공사완료 후 실제 시공수량과의 증감에 따라 사후 정산한다. 다만, 사소한 변경의 경우에는 그러하지 아니한다.

제 23 조 (계약의 해제)

(사)대구경북섬유산업협회는 계약상대자가 다음 각 호1에 해당하는 경우에는 최고의 절차없이 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 재료가 시방서 및 내역서 또는 견본과 적합하지 않을 경우

2. 계약기간 내에 전시장치공사를 완료치 못했거나 계약자의 귀책사유로 계약이행이 불가능하다고 인정될 경우

3. 계약자의 거소가 불분명하거나 계약이행을 소홀히 할 때

4. 2회 이상 검수에 불합격할 때

5. (사)대구경북섬유산업협회가 본 계약이행을 위하여 요구하는 서류제출 기타 협조 요구에 정당한 이유없이 불응하거나 고의로 지연시켰을 때

6. 정당한 이유없이 계약자가 본 계약의 해약을 요구하였을 때

7. (사)대구경북섬유산업협회의 허가없이 제3자에게 하도급 시켰을 때

8. 기타 계약자가 본 계약사항을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

제 24 조 (손해배상)

계약자는 제21조 1항 또는 제23조의 사유에 해당하여 (사)대구경북섬유산업협회에 손해를 발생케한 경우 본 계약과 관련한 보증금 또는 지체상금에도 불구하고 (사)대구경북섬유산업협회에 발생된 손해를 배상하여야 한다.

제 25 조 (권리의무 양도)

계약자는 (사)대구경북섬유산업협회의 서면승인 없이는 계약상의 권리의무를  제3자에게 양도 또는 담보의 목적으로 제공할 수 없다.

제3장  기타사항

제 26 조 (관련서류의 숙지)

입찰자는 (사)대구경북섬유산업협회가 정한 입찰자유의서, 도면 및 관련서류 등 기타입찰에 필요한 모든 사항을 입찰 전에 완전히 이해하고 납득한 것으로 간주하며, 입찰과 관련된 문서 등의 해석에 있어 이의가 있을 때에는 (사)대구경북섬유산업협회의 해석에 따른다.

제 27 조 (입찰조건의 변경)

입찰서 제출 후 낙찰자의 부주의에 의하여 발생되는 일체의 사항은 당사에서 정하는 바에 따라 용역을 수행하여야 하며, 이에 따라 발생하는 추가비용 및 추가용역 등에 대하여는 일체의 비용을 청구할 수 없다.

제 28 조 (질의사항)

입찰유의서 및 도면 등에 명시되지 않은 사항에 대하여 의문이 있을 시는 문서로 질의하여야 하며, 당사에서 결정하는 바에 따른다.

제 29 조 (배부자료의 반납)

입찰참가자는 (사)대구경북섬유산업협회에서 배부하는 일체의 관련 서류를 입찰등록 마감시까지 원상태로 반납한다. 다만, 낙찰자에 대하여는 계약체결시 재배부한다.

제 30 조 (복제 또는 타인대여 금지)

본 입찰과 관련된 제반서류는 (사)대구경북섬유산업협회의 승인없이 복제 또는 타인에게 대여할 수 없다.

입찰참가신청서

입찰건명	2005 대구국제섬유박람회
입찰일시	2005. 2. 28(월) 15:00

귀사의 입찰조건 및 제반 지시사항을 준수할 것을 확약하고, 상기 입찰에 참가하고자 동 신청서를 제출합니다.

2005년 2월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

인감대조필

사 용 인 감 계

귀사에서 시행하는 2005 대구국제섬유박람회 트랜드 포럼관 장치공사에 관한 입찰 및 계약에 있어 아래의 인감을 사용코자 사용인감계를 제출합니다.

사용인감

2005년  2월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

위   임   장

(수  임  자)

주        소 :

주민등록번호 :

직        위 :

성        명 :

상기인을 귀사에서 시행하는 2005 대구국제섬유박람회 트랜드 포럼관 장치공사에 입찰에 따른 제반사항(입찰등록, 입찰, 계약체결 등)에 대하여 대리인으로 위임합니다.

2005년   2월   일

(위임자)

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

입찰보증금 납부서

입찰건명 : 2005 대구국제섬유박람회 트랜드 포럼관 전시장치공사

입찰금액 : 일금                     원정(￦                    )

보증금내역 : 현금, 은행발행 자기앞수표, 이행보증보험증권, 기타(     )

위의 금액을 입찰보증금으로 납부합니다.

2005년  2월   일

주  소 :

상  호 :

대표자 :                (인)

(사)대구경북섬유산업협회 귀중

----------------------절------취------선----------------

입찰보증금 예치 및 환불확인서

금액 : 일금                     원정(￦                    )

보증금 내역: 현금, 은행발행 자기앞수표, 이행보증보험증권, 기타(     )

위와 같이 입찰보증금을 수납하였음을 확인합니다.

2005년  2월   일

수납인 :                (인)